ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 82 - Kobylisy 
"Stavební opravy družiny a výtvarné výchovy" 
Smlouva o dílo 
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, 
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 
se sídlem: Žernosecká 3/1597, 18200 Praha 8 - Kobylisy 
zastoupená: RNDr. Boženou Čerňanskou, Ph.D., ředitelkou školy 
IČ: 60433272 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.účtu: 2537071/0300 
dále jen .objednatel" 
a 
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. 
se sídlem: Mladoboleslavská 157, 19017 Praha 9 - Vinoř 
zastoupená: Pavlem Bajerem, jednatelem společnosti 
IČ: 18608426 
DIČ: CZ18608426 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č.účtu: 7313935001/5500 
dále jen .zhotovitel" 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny. To vše 
v rozsahu a za podmínek uvedených dále. 
1. PŘEDMĚT PLNĚNí 
1.1. Dílem dle této smlouvy jsou stavební opravy družiny a výtvarné výchovy v ZŠ Žernosecká 
3/1597, 182 00 Praha 8. Předmět a rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele, která je 
přílohou číslo 1. 
1.2. Provedení a kvalita díla bude odpovídat předpisům a normám platným v ČR a požadavkům 
výrobců užitých součástí. 
1.3. Předmět a rozsah díla je možno v průběhu prací změnit pouze formou písemného dodatku 
k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou specifikace sjednaných 
změn. 
2. DOBA PLNĚNí 
	2.1. 	Zhotovitel začne práce na díle nejpozději dne 14.9.2018 a dílo předá objednateli 
nejpozději dne 30.10.2018. 

3. CENA ZA ou,o 
3.1. Za provedení díla v rozsahu dle čI. 1 této smlouvy byla dohodou sjednána pevná smluvní 
cena ve výši: 
290 893,- Kč bez DPH 
61 087,- Kč 21  DPH 
351 980,- Kč včetně DPH 
3.2. Cena bude upravena formou písemného dodatku k této smlouvě v případě změn v projektové 
dokumentaci, vzniklých při realizaci na základě dohody smluvních stran. 
4. FAKTURACE, SPLATNOST SMLUVNí CENY 
4.1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur a 
konečné faktury, jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací za příslušný měsíc. 
Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení smluvní ceny. 
4.2. Veškeré vystavované faktury budou mít náležitosti odpovídající jejich druhu. Není-Ii sjednáno 
jinak, je jejich splatnost 14 dnů ode dne vystavení. 
5. PROVÁDĚNí DílA 
5.1. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že 
zjistí skrytou překážku znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. O tom musí 
neprodleně informovat objednatele. 
5.2. Zhotovitel odpovídá za věcně a odborně správné provedení prací, za to, že dílo je provedeno 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými normami a požadavky výrobců 
jednotlivých součástí. 
5.3. Zhotovitel odpovídá při provádění prací za pořádek, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
za dodržování bezpečnostních, požárních a dalších platných předpisů. 
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DílA A ZÁRUKA JAKOSTI 
6.1. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na provedené dílo za dále uvedených podm ínek. Zárukou 
se rozumí nárok na bezplatnou opravu závady, jejímž vlivem se parametry díla změnily tak, 
že neodpovídají parametrům stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
právními předpisy a technickými normami, které se na dílo vztahují. Záruka se vztahuje na 
vady použitého materiálu nebo chybnou montáž, nevztahuje se na mechanické poškození 
nebo poruchu způsobenou zásahem nepovolané osoby. 
6.2. Záruční lhůta na dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců vyjma zařízení, na které výrobce uvádí 
záruku nižší, nejméně však 24 měsíců. 
6.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Objednateli náleží práva plynoucí 
ze záruky od prvního dne záruční doby. 

7. SMLUVNí POKUTA 
7.1. Při předání díla v pozdějším termínu než je sjednáno v této smlouvě, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1  ze smluvní ceny za každý den prodlení, nanejvýše 
však 5  ze smluvní ceny. 
7.2. Při prodlení s placením faktur vystavených dle ujednání této smlouvy objednatel uhradí 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1  z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
7.3. Uvedené smluvní pokuty jsou splatné v termínu uvedeném na příslušné faktuře. 
8. PŘEDÁNí A PŘEVZETí 
8.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo po jeho řádném odzkoušení. O předání a 
převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, kde zejména uvedou stav díla. 
8.2. Dílo je v plném rozsahu dle čI. 1, vyjma záručního servisu, splněno prohlášením objednatele 
v zápisu o převzetí, že dílo přejímá. 
8.3. V případě, že se objednatel rozhodne převzít dílo nedokončené, s vadami a nedodělky, 
uvede se v zápise o předání a převzetí díla soupis zjištěných vad a nedodělků a termíny pro 
jejich odstranění. 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 
9.1. Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 
9.2. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
9.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá ze smluvních stran 
ponechá jednu. 
9.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 : Položkový rozpočet 
V Praze dne: 

		Položkový rozpočet stavby 			
Stavba: 	10057 	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce družiny,učebny Vv 		
Objednatel: 					IČO: 			
					DIČ: 			
Zhotovitel: 	FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. 		IČO: 18608426 	
	Mladoboleslavská 157 			DIČ: 			
r- 	190 17 Praha 9 							
Rozpis ceny 						Celkem 	
HSV 						76 109,69 	
PSV 						179947,86 	
MON 						19500,00 	
Vedlejší náklady 						15335,20 	
Ostatní náklady 						0,00 	
Celkem 						290892,75 	
Rekapitulace daní 							
Základ pro sníženou DPH 	15 	 		0,00 CZK 	
Snížená DPH 		15 	 		0,00 CZK 	
Základ pro základní DPH 	21 	 		290892,75 CZK 	
Základní DPH 		21 	 		61 087,00 CZK 	
Zaokrouhlení 						0,25 CZK 	
Cena celkem s DPH 					351 980,00 CZK 	
v 				dne 			

					

					':-' 'f3- U 		
	Za zhotovitele 			Za objednatele 			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Stránka 1 z 4 

Rekapitulace dílčích částí 

V.' c, 		o, 	''l: 	Základ pro 		Základ pro základní 		, 	, 	
ČíslO", 	Název 						OPH celkem 	Cena celkem 	. 	
" 	;: 	sníženou DPH 		DPH 		" 		
04 	Družina A-2/3A, Výtvarná výchova 		O 	290893 	61087 	351980 	100 	
10057 	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce soc.zař., d 		O 	290893 	61 087 	351 980 	100 	
Celkem za stavbu 				O 	290893 	61 087 	351 980 	100 	
Rekapitulace dílů 

Číslo ' 	"", 	.. 	v. 	~', 			l' 			
	Ná:z:ev 				Typ dílu 			Celkem 	 	
							;: 			
011 	Přípravné práce 			HSV 			3000,00 	1 	
3 	Svislé a kompletní konstrukce 		HSV 			2100,00 	1 	
61 	Úpravy povrchů vnitřní 			HSV 			27041,91 	9 	
94 	Lešení a stavební výtahy 			HSV 			1 000,00 	O 	
96 	Bourání konstrukcí 			HSV 			30293,65 	10 	
99 	Staveništní přesun hmot 			HSV 			1 348,69 	O 	
776 	Podlahy povlakové 			PSV 			110939,60 	38 	
777 	Podlahy ze syntetických hmot 		PSV 			26563,00 	9 	
783 	Nátěry 				PSV 			3727,50 	1 	
784 	Malby 				PSV 			38717,76 	13 	
M21 	Elektromontáže 			MON 			19500,00 	7 	
096 	Přesuny suti a vybouraných hmot 		PSU 			11 325,44 	4 	
VN 	Vedlejší náklady 			VN 			15335,20 	5 	
Cena celkem 							290892,75 	100 	

Zpracováno programem BUllDpower S, © RTS, a.s. 

Stránka 2 z 4 

S: 	10057 	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce družiny,učebny Vv 	
O: 	04 	Družina A-2/3A 	
R: 	10057 	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce družiny,učebny Vv-final 	
Položkový rozpočet 
P.Č 	Čfslo položky 	Název položky 	MJ 	množství 	cena / MJ 	Oelkem 	
Díl: 11 	Přípravné a přidružené práce 				3000,00 	
2 000000011v 	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných 	soubor 	1,00000 	1000,00 	1 000,00 	
5 000000014v 	Stavební přípomocí pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, 	soubor 	1,00000 	2000,00 	2000,00 	
		jejich zapraveníé, začištění 					
Díl: 3 	Svislé a kompletní konstrukce 				2100,00 	
6 340271515ROO 	Zazdívka otvoru,tl.15 cm 	soubor 	1,00000 	2100,00 	2100,00 	
Díl: 96 	Bourání konstrukcí 				30293,65 	
8 968072455ROO 	Bourání příčky tl.15cm 	m2 	10,80000 	355,00 	3834,00 	
9 766692123R02 	Demontáž záclon.krytů,garnýží, konzol dřevěných, 	soubor 	1,00000 	1 000,00 	1000,00 	
		kovových, lankových - do 270 cm 					
10 	776401800ROO 	Demontáž sokliků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 	m 	80,00000 	12,30 	984,00 	
11 	965081702ROO 	Bourání sokliků z dlažeb keramických 	m 	40,00000 	26,40 	1 056,00 	
12 	776511820ROO 	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 	m2 	108,00000 	88,90 	9601,20 	
13 	965048150Vvv 	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50 	m2 	108,00000 	97,40 	10519,20 	
		odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC,koberce 					
14 	978059531ROO 	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 	m2 	6,77500 	113,10 	766,25 	
15 	783802822ROO 	Obklad vnitřni stěn keramický, do tmele,weber.for profiflex 	m2 	2,98000 	850,00 	2533,00 	
		(lep), 					
Díl: 61 	Úpravy povrchů vnitřní 				27041,91 	
18 	610991111ROO 	Nalepení sádrokartonu 	m2 	7,00000 	550,00 	3850,00 	
19 	601016191ROO 	Penetračn í nátěr stropů 	m2 	26,43260 	66,70 	1763,05 	
20 	611421231RT2 	Oprava váp.omítek stropů do 10 plochy - štukových, s 	m2 	26,43260 	124,50 	3290,86 	
		použitím suché maltové směsi 					
21 	612409991RT2 	Zazdívka a obložení průrazu po inst.rozvodech 	soubor 	1,00000 	1600,00 	1600,00 	
22 	612401391RT2 	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou 	soubor 	1,00000 	3500,00 	3500,00 	
		šlukovou omítkou 					
24 	602016191ROO 	Sádrokarton 5x3 m 	m2 	15,00000 	690,00 	10350,00 	
25 	612471411ROO 	OSB desky stupínek 12,5 ti 	m2 	6,40000 	420,00 	2688,00 	
Díl: 94 	Lešení a stavební výtahy 				1 000,00 	
29 941955002ROO 	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 	souobr 	1,00000 	1 000,00 	1000,00 	
Díl: 99 	Staveništní přesun hmot 				1 348,69 	
31 999281111ROO 	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 	t 	1,12654 	1 197,20 	1348,69 	
Díl: 776 	Podlahy povlakové 				110939,60 	
34 	776101119R01 	Očištění povrchů 	m2 	108,00000 	67,20 	7257,60 	
35 	776590100VOO 	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah 	m2 	108,00000 	7,40 	799,20 	
36 	776101121ROO 	Provedení penetrace podkladu 	m2 	108,00000 	23,60 	2548,80 	
37 	776421100RU1 	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 	m 	80,00000 	60,30 	4824,00 	
		dodávky sokliku PVC 					
38 	776521100RT1 	Lepení povlak. podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC 	m2 	108,00000 	230,00 	24840,00 	
		ve specifikaci 					
43 	776210300RU2 	Lepení hran pryžových na stupně, včetně dodávky hran - 	m 	8,00000 	185,00 	1480,00 	
		barevná 					
39 	28412285R4 	Podlahovina PVC, 0339 	m2 	118,00000 	580,00 	68440,00 	
40 	776981113RU2 	Lišta přechodová,různá výška povl.podlah 	kus 	1,00000 	250,00 	250,00 	
41 	998776202ROO 	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 	 	1,00000 	500,00 	500,00 	
Díl: 777 	Podlahy ze syntetických hmot 				2656300 	
42 777561020ROO 	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm 	m2 	101,00000 	263,00 	26563,00 	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 3 z 4 

Položkový rozpočet 

S: 	10057 	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce družiny,učebny Vv 	
O: 	04 	Družina A-2/3A 	
R: 	10057 	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce družiny,učebny Vv-final 	

I> ,'; 							
P.Č 	Číslo položky' 	Název položky 	MJ 	množství 	cena / MJ 	Celkem 	
Díl: 783 	Nátěry 				3727,50 	
44 783903812ROO 	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 	m2 	10,50000 	25,00 	262,50 	
45 783225100ROO 	Nátěr syntetický 1x email 	m2 	10,50000 	330,00 	3465,00 	
Díl: 784 	Malby 				38717,76 	
46 	784402802ROO 	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m 	m2 	260,20000 	36,70 	9549,34 	
48 	784161601ROO 	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 	m2 	260,20000 	25,30 	6583,06 	
49 	784165432ROO 	Malba tek. bílá, bez penet.,2x 	m2 	260,20000 	86,80 	22585,36 	
Díl: M21 	Elektromontáže 				19500,00 	
50 210000001 	Elektroinstalace - silnoproud 	soubor 	1,00000 	19500,00 	19500,00 	
Díl: 096 	Přesuny suti a vybouraných hmot 				11 325,44 	
52 	979011211ROO 	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 	t 	2,85650 	675,70 	1930,14 	
53 	979011219ROO 	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošenim 	t 	2,85650 	322,40 	920,94 	
54 	979082111 ROO 	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 	t 	2,85650 	316,90 	905,22 	
55 	979082121ROO 	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 	t 	28,56498 	35,30 	1 008,34 	
56 	979087113ROO 	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 	t 	2,85650 	555,50 	1 586,79 	
57 	979083117ROO 	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 	t 	2,85650 	400,10 	1 142,89 	
58 	979083191ROO 	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 	t 	39,99098 	31,90 	1 275,71 	
59 	979093111 ROO 	Uložení suti na skládku bez zhutnění 	t 	2,85650 	12,00 	34,28 	
60 	979990181ROO 	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 	t 	0,10570 	1 522,80 	160,96 	
61 	979990191Vvm 	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, kovové prvky 	t 	0,41990 	1514,10 	635,77 	
62 	979999999ROO 	Poplatek za skládku 10  příměsí 	t 	2,33090 	739,80 	1 724,40 	
Díl: VN 	Vedlejší náklady 				15335,20 	
63 	VRNO 	Ztížené výrobní podminky 	Soubor 	0,00000 	0,00 	0,00 	
64 	VRN1 	Oborová přirážka 	Soubor 	0,00000 	0,00 	0,00 	
65 	VRN2 	Přesun stavebních kapacit 	Soubor 	0,00000 	0,00 	0,00 	
66 	VRN3 	Mimostaveništní doprava 	Soubor 	2,00000 	6389,70 	12779,40 	
67 	VRN4 	Zařízení staveniště 	Soubor 	0,00000 	3833,80 	0,00 	
68 	VRN5 	Provoz investora 	Soubor 	0,00000 	2555,90 	0,00 	
69 	VRN6 	Kompletační činnost (ICD) 	Soubor 	2,00000 	1277,90 	2555,80 	

Celkem 
Poznám ky uchazeče k zadán í 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

290892,751 
Stránka 4 z 4