Příloha č. 1 smlouvy - Harmonogram postupu prací:
1.	den:  	Převzetí stavby (bude zcela uzavřena jedna polovina plochy garáží v 4.NP),
příprava, brakování, lokální broušení a prořez trhlin na první polovině plochy 4.NP. Injektáž části trhlin stropu l.PP (při injektáži bude nutné uzavřít část garáží v l.NP).
2.	den:   	Brokování a lokální dobroušení první poloviny plochy 4.NP, penetrace a sanace
prořezaných trhlin, lokální vysprávky na první polovině plochy 4.NP. Injektáž části trhlin stropu l.PP (při injektáži bude nutné uzavřít část garáží v l.NP).
3.	den:  	Štěrková penetrace AST 105 se zásypem křemičitého písku první poloviny
plochy 4.NP. Zapravení injektovaných trhlin na podlaze l.NP (při zapravování bude nutné uzavřít část garáží v l.NP).
4.	den:   	Vysátí a tmelení první poloviny plochy 4.NP polyuretanovým tmelem AST 302.
Zapravení injektovaných trhlin na podlaze l.NP (při zapravování bude nutné uzavřít část garáží v l.NP).
5.	den:  	Nátěr soklů do v. 100 mm s utěsněním styku podlaha / stěna PU tmelem na
první polovině plochy 4.NP.
6.	den:    Nátěr plochy polyuretanovým tmelem AST 202 na první polovině plochy 4.NP.
7.	den:    Technologická přestávka pro vyzrání plochy v první polovině garáží 4.NP.
8.	den:    Uzavření druhé poloviny plochy garáží ve 4.NP. Brakování, lokální broušení
a prořez trhlin na druhé polovině plochy 4.NP.
9.	den:    Brakování a lokální dobroušení druhé poloviny plochy 4.NP, penetrace a
sanace prořezaných trhlin, lokální vysprávky na druhé polovině plochy 4.NP.
10.	den:    Štěrková penetrace AST 105 se zásypem křem. písku druhé poloviny 4.NP.
11.	den:    Vysátí a tmelení druhé poloviny plochy 4.NP polyuretanovým tmelem AST 302.
12.	den:   	Nátěr soklů do v. 100 mm s utěsněním styku podlaha / stěna PU tmelem na
druhé polovině plochy 4.NP.
13.	den:   	Nátěr plochy polyuretanovým tmelem AST 202 na druhé polovině plochy 4.NP.
14.	den:   	Technologická přestávka pro vyzrání plochy v druhé polovině garáží 4.NP.
15.	den:   	Uzavření celé plochy garáží ve 4.NP. Realizace VDZ.
16.	den:   	Realizace VDZ
17.	den:   	Předání díla
18.	den: 	Otevření garáží ve 4.NP