I 

DO DAT E K č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
I. 
Smluvní strany 
1.	Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 
	se sídlem: 	Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 959/33 
	zastoupena: 	Mgr. Martin Mikolášek - ředitel 
	IČ: 	00602051 
	DIČ: 	CZ00602051 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Jiří Havlíček 
(dále jen „objednatel“) 

2.	WINRO, s.r.o. 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 
Robertem Winklerem, jednatelem 
62300911 
CZ62300911 
KB Opava, a.s. 
19-0676460277/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 12646 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Robert Winkler, tel.: 602508112 
(dále jen „zhotovitel“) 
II. 
Předmět dodatku 
1.	Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 9. 2017 Smlouvu o dílo na provedení stavby 
s názvem: "Oprava pískovcového soklu a fasády objektu SUŠ, Ostrava". 
2.	Při realizaci díla byla zjištěna nutnost změn v tomto rozsahu: 
- ponechání větší části střešních svodů s lokální výměnou poškozených částí 
- očištění a nátěr ponechaných střešních svodů 
- v místě průchodu svodů přes kordonovou římsu doplnění průchodek z Pz plechu 
- větší rozsah montáže a demontáže rámového lešení pro opravu vnějšího fasády 
- neprovedení injektování mikropilot a kotev 
- neprovedení kotev chemickým tmelem M16 do cihelného zdiva 
- větší rozsah přídavné šroubovité nerezové výztuže prům. 8 mm pro sanaci trhlin 
3.	Rozsah těchto změn je blíže specifikován v rozpočtech změn ze dne 26. 09. 2018, jenž 
tvoří přílohu tohoto dodatku. 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Oprava pískovcového soklu a fasády budovy" 

III. 
Cena díla 

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

a)	Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se 
zavazuje k jejich provedení. 

b)	V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle nedošlo ke změně sjednané ceny díla 
pro rok 2018, která zůstává ve výši 2.944.541,40 Kč bez DPH (tj. 3.562.895,00 Kč 
včetně DPH). 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1.	Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 05. 09. 2017 a dodatku č. 1 až 3 tímto dodatkem 
neupravená zůstávají v platnosti beze změn. 

1.	Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení. 
2.	Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. 
3.	Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou tyto přílohy: 
- Příloha: - položkové rozpočty změn 

3.	

V Ostravě dne 5. 10.2018                                                                     

za objednatele
Mgr. Martin Mikolášek, ředitel 

 

                   Ve Velkých Hošticích dne 5. 10. 2018

   

                   za zhotovitele 
                   Roman Winkler, jednatel 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Oprava pískovcového soklu a fasády budovy" 

2