Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 42/2017/RR/Mu 
uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi 
                                
Objednatelem:			Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města 
						Ing. Sylva Kováčikovou, místostarostou města
Zastoupený ve věcech technických: 	
telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:				
IČO:			        	00297755
DIČ:					CZ00297755
e-mail: 				
(dále jen objednatel)

Zhotovitelem:				Ing. arch. Martin Materna
Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava  
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. arch. Martin Materna
Bankovní spojení:			Raiffeisenbank
Číslo účtu				
DIČ:					CZ7410305287
IČO:			          	72482346	
Telefon:				
e-mail:					
-	společně označováni jako „ smluvní strany“

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 42/2017/RR/Mu ze dne 
2. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2017/RR/Mu ze dne 23. 3. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 42/2017/RR/Mu ze dne 25. 6. 2018 na zpracování architektonické studie Návrh využití 1. PP zámku Bílovec v místnostech č. 14 – 20 a navazující projektové dokumentace jednostupňové pro stavební povolení (dle rozsahu nutných stavebních úprav), takto:
Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 12 takto:
12. Na základě projednání se stavebním úřadem bude vedeno společné územní a stavební řízení pro danou stavbu.

Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí: 
	a)	Doměření prostoru a digitalizace:
          	Cena bez DPH:  		     	  6 000,- Kč
			DPH 21%:   		  	     	  1 260,- Kč                        	            
	Cena vč. 21% DPH: 	 	  7 260,- Kč  
	b)	Architektonická studie:
          	Cena bez DPH:  		  	 40 000,- Kč
			DPH 21%:   		  	   	  8 400,- Kč                        	            
	Cena vč. 21% DPH: 	 	 48 400,- Kč  
 	c1) 	Projektová dokumentace pro společné řízení – část pro stavební povolení:
	Cena bez DPH:  			165 000,- Kč
			DPH 21%:   		  		 34 650,- Kč                        	            
	Cena vč. 21% DPH: 		199 650,- Kč  
	c2)   	Projektová dokumentace pro společné řízení – část pro územní řízení:
	Cena bez DPH:  			103 000,- Kč
			DPH 21%:   		  		 21 630,- Kč                        	            
	Cena vč. 21% DPH: 		124 630,- Kč  
	d) 	Inženýrská činnost a zajištění vydání společného povolení:
	Cena bez DPH:  		   	 16 000,- Kč
			DPH 21%:   		  	  	  3 360,- Kč                        	            
	Cena vč. 21% DPH: 		 19 360,- Kč  
Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:
		Cena bez DPH:  	330 000,- Kč
		DPH 21%:    	69 300,- Kč                        	            
	Cena vč. 21% DPH: 	399 300,- Kč 
(slovy:   třistadevadesátdevěttisíctřista korun českých, vč. DPH)
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:				ihned po podpisu smlouvy          
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   	
b)  	Architektonická studie				do 28. 2. 2018
c1+c2)	Projektová dokumentace pro společné řízení, zajištění stanovisek dotčených  
        orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet,
        podání žádosti o společné povolení:			do 20. 3. 2019 

d) Předání vydaného společného povolení:			předpoklad do 100 dní od podání 
žádosti

Článek IV. Platební a fakturační podmínky, odst. 2., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
2.	Po předání a převzetí dílčí části díla (a - d) díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy na základě předávacího protokolu.

2)	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3)	Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 42/2017/RR/Mu.
4)	Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne:	7. 11. 2018				V Bílovci dne: 7. 11. 2018 
Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………..	……..                         ……………………………..
Mgr. Pavel Mrva					Ing. arch. Martin Materna	
starosta města