Dodatek č.l 
ke Smlouvě o dílo - č.sml, 13/02/18, uzavřené dne 1. března 2018 podle § 2586 a násl. zák. Č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
I. Smluvní strany: 
	Zhotovitel: 	TOPINGAS s.r.o. 
Klenice 43, 503 15 Stračov 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u 
IČO: 25971018 
DIČ: CZ25971018 
bankovní spojení: SBERBANK Hradec Králové 
číslo účtu: 
statutární zástupce: Luštický Kamil, Luštická Petra 
zástupce ve věcech smluvních: Luštický Kamil, Luštická Petra 
zástupce ve věcech technických: René Aliňák 
na straně jedné (dále jen "zhotovitel") 
a 
Objednatel: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. 
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové 
číslo účtu: 
IČO: 25282174 
DIČ: CZ 25282174 
statutární zástupce: Ing. Jiří Seidler, Ph.D.- předseda představenstva 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Juránek, místopředseda představenstva 
zástupce ve věcech technických a technický dozor objednatele (TDI): 
Ing. Jiří Vítek, vedoucí provozu předávacích stanic, mob.: 
na straně druhé (dále jen "objednatel") 
II. Předmět dodatku: 
Na základě ustanovení čI. III. Cena díla, odst. 2, se smluvní strany dohodly na následujícím 
rozšíření předmětu díla: 
1/2 

Rozšíření tepelných izolací včetně oplechování, nad rámec PD na potrubí nedotčeném 
původní rekonstrukcí (technologie AlfaLaval). 
V důsledku rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly: 
l.na doplnění čI. III. Cena díla v odst. 1. o následující ustanovení: 
	Tepelné izolace nad rámec PD 	.43 500 Kč bez DPH 
a změně 
Smluvní cena díla na celý rozsah díla, která činí bez DPH - 831 393 Kč 
2. na změně čI. VI. Doba plnění, spočívající v prodloužení termínu: 
	Předání dokončené stavby nejpozději 	15.10.2018 
Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

Za Zhotovitele: V Hradci Králové 
                           Dne: 3.9.2018

Za Objednatele: 
V Hradci Králové dne  3.9.2018